10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대명10동 주민센터 신축

담당자

행정지원과

공남수(☎664-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공 후 30년이 경과되어 노후된 주민센터를 다기능 복합건물로  신축함으로써       다양한 주민욕구에 부응

○ 협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을

통한 주민의식 수준에 걸맞는 행정․복지 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5 ~ 2018. 3

○ 위 치 : 남구 대명복개로 4길 166

○ 규 모 : 대지면적 461㎡, 연면적 800.62㎡(지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,012백만원 (국비 500백만원, 시비 400백만원, 구비 1,112백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,737		494	1,243
국 비	500			500
시 도 비	400		400
시군구비	837		94	743
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  5월 : 석면철거 완료,

○ 2017.  8월 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2017.  9월 : 공사 착공

○ 2018.  3월 : 공사 준공, 이전 개소 및 대명10동 행정복지센터 운영

□ 향후계획 : 추진 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

대명11동 주민센터 신축

담당자

행정지원과

공남수(☎664-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공 후 30년이 경과되어 노후된 주민센터를 다기능 복합건물로  신축함으로써        다양한 주민욕구에 부응

○ 협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을

통한 주민의식 수준에 걸맞는 행정․복지 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5 ~ 2018. 3

○ 위 치 : 남구 관문시장4길 53(대명동 1180번지)

○ 규 모 : 대지면적 720.8㎡, 연면적 992.283㎡(지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,588백만원 (시비 400백만원, 구비 2,188백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,462		811	1,651
국 비
시 도 비	400		400
시군구비	2,062		411	1,651
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  5월 : 석면철거 완료,

○ 2017.  8월 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2017.  9월 : 공사 착공

○ 2018.  3월 : 공사 준공, 이전 개소 및 대명11동 행정복지센터 운영

□ 향후계획 : 추진 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

봉덕1동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과

공남수(☎664-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남구청사 내 의회건물에 입주한 주민센터를 신규 부지매입을 통해 다기능
복합건물로 신축함으로써 다양한 주민욕구에 부응하고

○  협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을

통한 주민의식 수준에 걸맞은 행정․복지 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1 ~ 2019. 6

○ 위 치 : 남구 봉덕로 51-4 외 2필지 (봉덕동 694-4번지 외)

○ 규 모 : 대지면적 664㎡, 연면적 978.535㎡(지상 4층)

- 총사업비 : 4,672백만원 정도

(재산매입 : 2,000백만원, 신축공사 : 2,672백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,672백만원 (국비 300백만원, 시비 1,200백만원, 구비 3,172백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,424	0	188	1,879	2,357
국 비	300				300
시 도 비	1,200				1,200
시군구비	2,924	0	188	1,879	857
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 11월 : 부지매입 계약금 지출

○ 2018.  3월 : 기본 및 실시설계 용역 발주

○ 2018.  5월 : 부지매입 잔금 지출 및 소유권 이전 완료

○ 2017.  7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2018. 10월 : 공사착공

○ 2019.  6월 : 공사 준공, 이전개소 및 봉덕1동 행정복지센터 운영

□ 향후계획 : 추진완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

제25회 대덕제 대구앞산빨래터 축제

담당자

문화관광과 이경진(☎664-3262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 역사․문화적 소재와 관련된 차별화․특성화된 축제 프로그램을 통       하여 남구민 및 대구시민이 함께 참여하는 화합과 소통의 장을 마련하고       지역 대표축제로 자리매김하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. 28. ~ 4. 29.

○ 위 치 : 앞산빨래터공원, 앞산 맛둘레길 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	485		215	270
국 비
시 도 비	25		15	10
시군구비	460		200	260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 문화행사추진위원회 회의, 민간행사 사업보조금 교부

○ 행사대행 용역 입찰, 계약, 행사준비, 진행

○ 홍보, 행사준비, 행사개최, 결과 정산 및 평가

□ 향후계획

○ 행사 시 개선사항 보완하여 진행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2000배 행복마을 만들기 사업

담당자

도시재생과 최민현(☎664-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이천동 일대 주거지역이 재개발 예정구역으로 지정되었으나 사업의 불확실성        등으로 인하여 해제되어 주거환경 개선 및 미군부대 주변의 경관 개선 시급

○ 주거지 재생 사업 추진으로 물리적·사회적·경제적 재생하여 미래지향적인       도시환경의 모델 제시

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014년 ~ 2019년

○ 위 치 :  건들바위네거리 ~ 대봉교일원

○ 규 모 :  L=3.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,523백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,523	7,758	3,649	2,116	0
국 비	6,446	3,879	1824.5	1,058	0
시 도 비	3,223	1,939.5	912.25	529	0
구 비	3,854	1,939.5	912.25	529	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2018.  4월 : 이천 어울림 도서관 준공

○ 2018.  5월 : 이천동 테마거리 1단계 조성 완료

○ 2018.  8월 : 2000배 행복마을 제3공영주차장 조성

○ 2018.  9월 : 이천동 테마거리 2단계 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 이천동 테마거리 2단계 조성 완료  : 2019. 9월

○ 2000배 행복마을 축제 등 프로그램 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대명행복 문화마을조성사업

담당자

도시재생과 조정훈(☎664-2802)

□ 사업목적 및 필요성

○  지리적으로 대구의 중심에 위치하면서도 인구 유출이 심화되고, 열악한 주거      환경이 지속됨에 따라 도시재생선도지역의 지정을 통한 개발로 타 자치구와의      격차 해소 및 지역균형발전 필요성 제기

○ 남구의 대표적인 낙후지역인 대명2, 3, 5동 일대(봉덕3동 일부포함)를 도시재생

선도지역 사업으로 경제적, 환경적, 사회문화적 도시재생 추진

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014년 ~ 2019년

○ 위 치 :  대명2, 3, 5동

○ 규 모 :  A=2.0㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,608	10,404	630	574	0
국 비	6,054	5,850	204	0	0
시 도 비	2,027	1,527	213	287	0
구 비	2,327	1,827	213	287	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	1,200	1,200	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2018.  3월 : 대명공연거리 1단계 조성 완료

○ 2018.  4월 : 영유아 체험시설 리모델링 준공

○ 2018. 12월 : 대명공연거리 2단계 실시설계 용역 완료

○ 2019.  6월 : 대명공연거리 2단계 조성 완료

□ 향후계획

○ 2019. 9월 : 대명공연거리 계명대학교 담벽 벽화조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

마음을 연결하는 앞산행복마을 조성

담당자

도시재생과 최민현(☎664-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인근 앞산맛둘레길, 카페거리, 안지랑 곱창골목 등 관광자원을 활용하여

방문객 유입증가 및 새로운 관광루트 개발

○ 주택 노후화 및 인구감소, 고령화 등으로 침체된 마을을 재생하여 주민

커뮤니티 공간 조성 및 특색있는 테마거리 조성으로 지역공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 대명역~대명네거리~벽천분수~앞산빨래터공원

○ 규 모 : A=481,651㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,630	3,240	2,329	2,555	506
국 비	3,465	1,049	791	1,288	337
시 도 비	1,732.5	71.5	713	779	169
구 비	1,732.5	419.5	825	488	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	700	700	0	0	0
특별교부금	1,000	1,000	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2018.  4월 : 행복웰컴센터 준공

○ 2019.  1월 : 생활안전 CCTV 설치공사 준공

○ 2019.  4월 : 앞산 빨래터공원 경관 조형물 설치

○ 2019.  6월 : 대명중앙시장 간판개선사업 완료

□ 향후계획

○ 불법쓰레기 CCTV 설치공사 : 2019. 8월

○ 행복 커뮤니티 플랫폼 조성 추진 : 2019. 8월~2020. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 인센티브(724백만원) 반영 및 행복 커뮤니티 플랫폼 신규사업 추가

총사업비 변경(7,906백만원→8,630백만원) 신청 : 2019. 7. 22

사업명

미군부대 주변 안전·행복 마을만들기

(새뜰마을사업)

담당자

도시재생과 최민현(☎664-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미군부대 소음피해 및 재개발 해제에 따른 열악한 주거환경을 개선하여

주민들의 기본적인 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 대명5동 캠프워커 북편일원(13통 일부, 16통)

○ 규 모 : A=20,153㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,057백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,057	0	14	1,364	679
국 비	1,440	0	8	957	475
시 도 비	185	0	5	119	61
시군구비	432	0	1	288	143
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 10월     : 새뜰마을사업 마스터플랜 심의(조건부 승인)

○ 2019.  1월     : 새뜰마을사업 마스터플랜 및 실시설계 용역 완료

○ 2019.  4월     : 새뜰마을사업 범죄예방 CCTV 및 LED 보안등 설치

○ 2019. 5월~7월  : 새뜰마을사업 추진에 대한 주민의견 수렴

□ 향후계획

○ 2019.  8월 : 새뜰마을사업 추진 국토교통부 협의

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

앞산 카페거리 공영주차장 조성

담당자

교통과 장은석(☎664-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 명소로 자리 잡은 앞산 카페거리의 늘어나는 주차 수요와 밀집된 주택가 주민들의 주차 불편 해소를 위해 공영주차장을 조성하여 열악한 주차여건을 개선하고 주민들의 정주여건을 향상코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2월 ~ 9월

○ 위 치 : 대명9동 501-3번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성 A=989.8㎡, 주차면 32면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,458백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,379		3,379
특별교부금	1,000		1,000
시 도 비	550		550
시군구비	1,829		1,829

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 2월 : 앞산 카페거리 공영주차장 조성 계획 수립

○ 2019. 4월 : 부지 매매계약 및 실시설계용역 완료

○ 2019. 5월 : 공영주차장 조성공사 착공

○ 2019. 9월 : 공영주차장 조성공사 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)