109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
자가통신망 (Access망) 구축	1,201	-	1,201	-	-	2020	2018	100%
공동체 활성화 복지거점센터 건립	10,000	2,000	1,020	2,846	6,134	2022	2019	50%
시간풍경이 흐르는 배나무샘골	9,000	1,433	1,336	5,481	750	2022	2019	35%
미군부대주변 안전·행복마을 만들기 (새뜰마을사업)	2,057	220	-	사업취소로 사업비정산 및 반납완료	-	-	2017	-
빨래터공원 공영주차장 조성	3,600	-	86	3,514	-	2022	2019	25%
앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성	4,800	650	74	2,000	2,076	2022	2018	10%
고산골 공룡공원 확장조성	4,000	41	-	65	-	2023	2018	8%
앞산레포츠산업을 통한 지역활성화	21,600	-	50	34	-	2025	2019	10%
강당골 스포츠 클라이밍장 조성공사	3,850	691	902	2,257	-	2021	2019	58%
대명1동 외2개소 공영주차장 조성	3,113	-	2,618	495	-	2021.7.	2020	10%
고산골 공영 주차빌딩 건립	4,900	-	333	4,350	-	2022.6.	2020	5%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자가통신망(Access망) 구축

담당자

민원정보과 신석환(☎664-2475)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기간통신사업자로부터 임대하여 사용 중인 통신망을 자가통신망으로 전환,      구축하여 공공요금 절감, 통신회선 성능 및 보안성을 향상시키고 4차 산업      혁명 대비 통신 기반시설로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020

○ 위 치 : 대구광역시 남구청 외 349개소

○ 규 모 : 남구 관내 광케이블 49,112m 구축 공사

Access망 시스템 구축 (센터설비 1식, 현장설비 349식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,201백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,201	-	1,201	-	-
국 비	300	-	300	-	-
시 도 비	900	-	900	-	-
시군구비	1	-	1	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 자가통신망(Access망) 구축 공사 계약   :  2019. 10월

○ 감리용역 계약                        :  2019. 11월

○ 유관기관 협의                        :  2020. 1월 ~ 2020. 4월

○ 관급자재(Access시스템) 구매사업 계약  :  2020. 4월

○ 공사 설계변경                        :  2020. 6월

○ 운영 시스템 구매                     :  2020. 12월

○ 사업완료                             :  2020. 12월

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

공동체활성화 복지거점센터 건립

담당자

복지지원과 이민우(☎664-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시달성교육지원청 재산 매입을 통하여 노인인구 증가에 따른

공동체 활성화 복지거점센터 구축으로 어르신들의 노후생활을 증진코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 대구광역시 남구 대명복개로1길 38 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층 / 철근콘크리트조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000
국 비	4,470	1,000	510	823	2,137
시 도 비
시군구비	3,530	1,000		533	1,997
지 방 채
민간자본
특 교 금	2,000		510	1,490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 6. 14. : 달성교육지원청 매매계약(41.84억원)

○ 2019. 6. 19. : 1차 매입대금 납입(20억원)

○ 2020. 6. 30. : 2차 매입대금 납입(10억원)

○ 2020. 7. 30. : 정밀안전진단 용역 실시

○ 2021. 2. 25. : 매입잔금 납입(11.84억원)

○ 2021. 3. 31. : 실시설계 용역(120일간)

□ 향후계획

○ 2021. 9월 : 공사 착공

○ 2022. 3월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ 2020. 7. 31. : 행정안전부 변경계획 제출(신축 → 리모델링 공사)

사업명

시간 풍경이 흐르는 배나무샘골

담당자

도시재생과 이연희(☎664-2802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 주거환경으로 인한 인구 유출과 도시활력 저하로 주민들의 삶의 질 향상을 위한 도시재생 필요

○ 대봉배수지 및 배나무샘골 등 역사문화적 자원을 활용하여 마을의 새로운 이미지를 구축하는 등 도시활력 동력 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2021 (1년 연장 예정)

○ 위 치 : 대구광역시 남구 이천동 403번지 일원

○ 면 적 : 49,894㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000	1,433	1,336	5,481	750
국 비	4,500	1,315	1,114	2,071	0
시 도 비	2,250	0	0	1,500	750
시군구비	2,250	118	222	1,910	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 도시재생 뉴딜사업 공모 선정                   : 2018. 9월

○ 실행계획 국토교통부 도시재생특별위원회 통과   : 2019. 7월

○ 배나무샘골 마을문화센터 부지매입 완료         : 2019. 12월

○ 배나무샘골 마을문화센터 설계공모 및 실시설계  : 2020. 1~9월

○ 집수리 가이드라인 수립 및 집수리공사 실시설계 : 2020. 4~11월

○ 배나무샘골 마을문화센터 착공                  : 2020. 12월

○ 그린파머 공유텃밭 조성공사                    : 2020. 12~2021. 4월

○ 안심보행길 CCTV, 고보조명 등 설치공사        : 2020. 12~2021. 6월

○ 노후주택 집수리공사 착공                      : 2021. 2월

○ 영선초 남편 보행로 조성공사 실시설계          : 2021. 3~4월

□ 향후계획

○ 영선초 남편 보행로 조성공사                   : 2021. 7~8월

○ 노후주택 집수리공사 준공                      : 2021. 8월

○ 배나무샘골 마을문화센터 준공                  : 2021. 10월

○ 시간풍경 골목길 설계공모 및 조성공사          : 2021. 7~2022. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음

사업명

빨래터공원 공영주차장 조성

담당자

공원녹지과 진창희(☎664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산을 방문하는 이용객과 인근 주민들의 주차불편 해소를 위해 공영주차장 및 공원 재조성으로 주차환경 개선과 주민 휴식 공간을 제공하여 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 대명동 1501-2번지 일원(빨래터공원)

○ 규 모 :

·주차장 조성(1층) A=1,500㎡(92면)

·공원 재조성(필로티 옥상층)  A=2,300㎡

·기타(전기, 통신, CCTV 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원(지특 1500, 시비 750, 구비 50, 특교금 600, 특교세 700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600		86	3,514	-
국 비	1,500	-	43	1,457	-
시 도 비	750	-	21.5	728.5	-
시군구비	1,350	-	21.5	1328.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2019.  8. : 빨래터공원 공영주차장 조성 계획 수립

○ 2019.  9. : ‘20 생활SOC사업선정

○ 2020.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2020.  8. : 설계자문회의

○ 2020. 12. : 주요자재 선정

○ 2021.  1. : 도시군관리·공원조성계획 변경
○ 2021.  4. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022.  2. : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

앞산 골안골 도시형캠핑장 조성

담당자

공원녹지과 김혜진(☎664-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산 생태자원과 역사, 문화 자산을 활용하여 관광산업 활성화와 열악한

정주환경을 개선하고, 도심에서 가족유대를 다질 수 있는 캠핑장 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2019. ~ 2022.

○ 위 치: 대명동 산278-2번지 일원(골안골)

○ 규 모: 휴게공간조성 A=5,721㎡

· 캠핑장(A=2,447㎡, 18면), 주차장(25대), 관리동(A=180㎡)

· 화장실(A=33.0㎡), 야외무대, 천문돔, 체육시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,800백만원(특교세 800, 특교금 2,000, 구비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	650	74	2,000	2,076
국 비	-	-	-
시 도 비	-	-	-
시군구비	4,800	650	74	2,000	2,076

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 10%)

○ 2019.  5. ~ 2020. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 12. : 편입용지 보상(4필지 중 2필지 완료)

○ 2020.  5. : 실시설계용역 최종보고회

○ 2020. 10. : 미협의토지(2필지) 수용신청(지토위)

○ 2021.  4. : 편입용지 보상 완료

○ 2021.  4 ~ 6. : 문화재시굴 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021.  7. : 공사착공

○ 2022.  6. : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

고산골 공룡공원 확장조성

담당자

공원녹지과 김혜진(☎664-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산 고산골 공룡화석지(발자국, 건열, 연흔) 보존 및 체계적 관리 및

첨단 IT 체험학습관 건립으로 성장기 유소년 교육 메카로 자리매김

□ 사업개요

○ 기 간: 2019.~2023.

○ 위 치: 봉덕동 1230번지 일원(고산골 공룡공원)

○ 규 모: 공원조성A=6,963㎡(기존3,488㎡ 증3,475㎡)

ㆍ 체험학습관(지상2층, 연면적1,200㎡): 전시(상설,기획), 가상체험, 다목적 교육장 등

ㆍ 야외시설: 야외체험시설, 휴게공간, 다목적광장, 횡단교량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,000백만원(구비 4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	43	-	65	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	43	-	65	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 8%)

○ 2019.  5. : 실시설계용역 착수

○ 2019.  8. : 설계자문회의 및 중간보고

○ 2019.  9. : 설계용역 중지(‘19. 9. 24.)

⇒ 시 장기미집행공원 조성에 따른 사유지 매입 완료 후 사업추진

○ 2020. 12. : BF예비인증(우수등급)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 편입용지보상(대구시 예정)

○ 2022. ~ 2023. : 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

앞산레포츠산업을 통한 지역활성화

담당자

공원녹지과 진창희(☎664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태환경 복원과 레포츠산업을 결합한 체험형 여가 공간 조성하여

생태ㆍ역사ㆍ문화 탐방을 한번에 체험하는 모노레일 관광벨트 구축

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. ~ 2025.(1단계 사업 : 2021. ~ 2023.)

○ 위 치: 앞산공원(고산골~앞산맛둘레길)

○ 규 모

ㆍ 생태체험시설 : 모노레일 5.6km, 생태숲조성 A=69ha, 정거장 4개소, 전동차량 15대

ㆍ 모험레포츠시설 : 짚코스터(L=500m), 짚라인(L=800m), 스마트모빌트랙(L=300m)

ㆍ 휴게시설 : 쉼터 2개소, 전망대 1개소, 가로환경정비 L=500m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 21,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,600	-	50	34	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,600	-	50	34	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 10%)

○ 2019.  5. ~ 2020. 11. : 기본계획수립용역 완료

○ 2020.  6. : 자문회의 및 중간보고

□ 향후계획

○ 2021.  7. : 소규모환경영향평가용역 및 재해영향성검토용역 완료

○ 2021. 12. : 편입용지보상(대구시 예정)

○ 2021. ~ 2023. : 실시설계 및 공사시행(1단계)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초: 모노레일 L=4.6km, 변경 모노레일 L=5.6km

○ 사업비

- 당초: 16,700백만원, 변경: 21,600백만원

사업명

강당골 스포츠클라이밍장 조성

담당자

공원녹지과 유재광(☎664-2842)

□ 사업목적 및 필요성

○앞산관광명소화사업과 연계하여 레저스포츠를 즐길 수 있는 스포츠 클라이밍      시설을 조성하여 앞산을 사랑하는 지역주민에게 다양한 여가활동을 제공하고      레저스포츠 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 ~ 2021년 08월

○ 위 치 : 남구 봉덕동 산132-7번지 일원

○ 규 모 : 리드벽(29m×16m), 스피드벽(6m×16m), 볼더링벽(24m×5m),

관리동, 휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원(지특 600, 특교금 800, 특교세 600, 구비 1,850)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,850	691	902	2,257	-
국 비	1,200	7	211	982	-
시 도 비	800		285	515	-
시군구비	1,850	684	406	760	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

○ 2019.  6. : 실시설계용역시행 및 토지보상 완료

○ 2019. 12. : 도시계획관리시설 결정 및 지형도면 고시

○ 2020.  6. : 도시계획관리시설 실시계획 고시완료

○ 2020. 12. : 공사착공

○ 2021.  1. : 인공암벽장 토공 및 기초타설

○ 2021.  3. ~ 5. : PC박스시공, 저류지정비, 인공암벽장 및 볼더링 철골조립완료

○ 2021.  6. ~ 7. : 관리동 및 휴게시설 설치, 데크설치, 암벽패널설치

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 공사준공

사업명

대명1동 외2개소 공영주차장 조성

담당자

교통과 이유섭(☎664-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택밀집지역으로 주차 수요 대비 주차공간 공급량이 현저히 부족한 대명1동과 대명4동에 공영주차장을 조성하여 주차공간 부족에 따른 불편 및 분쟁을 해소하고 주민의 삶의 질 향상에기여 코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9월~2021. 7월

○ 위 치 : 대명1동 1673-22번지, 대명4동 3038-3번지, 대명4동 3010-40번지

○ 규 모 : 부지면적 1,618.9㎡, 주차면수 58면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,113	-	2,618	495	-
국 비	1,250	-	1,250	-	-
시 도 비	625	-	625	-	-
시군구비	1,238	-	743	495	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 부지매입 및 실시설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 대명1동 외2개소 공영주차장 조성공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초: 부지면적 1,175.2㎡, 주차면수 44면

- 변경: 부지면적 1,618.9㎡, 주차면수 58면

○ 사업비

- 당초: 2,900백만원

- 변경: 3,113백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고산골 공영 주차빌딩 건립

담당자

교통과 이유섭(☎664-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고산골 공룡공원 확장에 따라 관람객 편의증진 및 거주자 주차불편을 해소하고자 고산골 제2공영주차장을 확장하여 주차빌딩을 건립함으로써 효율적인 주차공간을 조성하고 주차환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11월~2022. 6월

○ 위 치 : 봉덕동 1287-1번지 외2필지

○ 규 모 : 대지면적 1,917㎡, 지상3층, 주차면수 120면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,900	-	333	142	4,425
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	-	333	142	4,425
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 부지매입

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음