109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
시간풍경이 흐르는 배나무샘골	9,548	8,398	1,150	-	-	2023	2019	100
자가통신망 3단계 구축사업	2,497	1,201	1,296	-	-	-	2018	100
대봉배수지 물 문화 공원 조성	1,992	125	44	1823	-	2024	2019	70
앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축	30,000	0	5,465	0	24,535	2027	2022	30
남구 공연문화 예술학교 운영	150	0	150	0	-	2023	2023	100
남구 가족센터 이전	2,294	170	2,124	-	-	2023	2023	100
남구 시니어공유 생활주택 조성	2,867	2,867	811			2026	2023	20
고산골 공룡공원 확장조성	4,913	-	-	20	4880	2025	2019	10
앞산 레포츠 산업을 통한 지역 활성화 사업	14,300	314	19	-	141,47	2026	2023	10
앞산 고산골 진입로 생태 쉼터 조성	4,305	-	128	1,881	2,296	2025	2022	40
봉덕3동 캠프워커 주변도로 개설공사	2,450	1,950	327	152	-	2024	2021	100
고산골 공영 주차빌딩 건립	6,588	734	5,186	251	-	2023	2020	100

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

우리 남구 개별 투자심사 사업의 추진현황은 별지로 작성하였습니다.

10-2. 지방채 발행사업

우리 남구에서 ’23년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남구에서 ‘23년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.